ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 
капитального ремонта жилищного фонда 
Слонимского района на 2025 год

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
	
№
п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта	Виды ремонтно-строительных работ	
			начало
месяц, год	окончание
месяц, год		

1	2	3	4	5	6	
1.	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Черняховского, 2 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3	07.2025	10.2025	Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения (в МОП), замена окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
2.	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Черняховского, 6 в г. Слониме (в том числе ПИР)		07.2025	10.2025	Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения (в МОП), замена окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
3.	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Танкистов, 2 в агрогородке Большие Шиловичи Слонимского района (в том числе ПИР)	2,5	07.2025	09.2025	Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
4.	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Танкистов, 2а в агрогородке Большие Шиловичи Слонимского района (в том числе ПИР)	3,0	07.2025	10.2025	Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
5.	Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, 13/3 в г. Слониме (в том числе ПИР)		06.2025	09.2025	Капитальный ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), замена окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты                	
6.	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестская, 103/6 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,5	06.2025	10.2025	Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей канализации и электроснабжения, ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
7.	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестская, 109   в г. Слониме (в том числе ПИР)	4,0	01.2025	05.2025	Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт входных групп, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), замена окон в местах общего пользования замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
8.	Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, 9   в г. Слониме (в том числе ПИР)	4,0	01.2025	08.2025	Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
9.	Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, 15/1    в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,0	01.2025	05.2025	Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
10.	Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, 15/2    в г. Слониме (в том числе ПИР)	4,0	01.2025	06.2025	Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
11	Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, 13/2    в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,0	06.2025	09.2025	Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт лоджий, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
12	Капитальный ремонт жилого дома по пер. Менделеева, 14    в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,0	01.2025	07.2025	Капитальный ремонт кровли, утепление торцевых стен, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
13	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестская, 65    в г. Слониме (в том числе ПИР)	2,5	06.2025	09.2025	Замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
14	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Южная, 31 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,0	07.2025	10.2025	Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
15	Капитальный ремонт жилого дома по пер.1- Лесной, 11 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,5	05.2025	09.2025	Капитальный ремонт кровли, утепление торцевых стен, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
16	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советской, 60Б в г. Слониме (в том числе ПИР)	3,5	01.2025	07.2025	Капитальный ремонт кровли, утепление торцевых стен, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, канализации и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты	
17	Капитальный ремонт общежития по ул. Брестская, 69/4 в г. Слониме (в том числе ПИР)		06.2025	11.2025	Ремонт стыков стеновых панелей, замена окон и дверей в объеме всего здания, ремонт мест общего пользования, ремонт пожарной сигнализации, сетей электроснабжения	
18	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Школьная, 7 в аг. Сосновка Слонимского района (в том числе ПИР)	2	01.2025	06.2025	Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации (по подвалу и техэтажу) и электроснабжения (в МОП), ремонт окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты